40. 목포역사 신축 및 철도시설 재배치

	【 취지 및 목표 】
❖ 노후된 목포역사를 신축하여 철도․도로․해양 진출기점인 목포역의 역사적․지리적 상징성 제고 및 서남권 랜드마크형 거점역사로 활용 ❖ 고속철 완공에 따른 신규철도 증편 수용을 위해 시설을 재배치하여 철도이용 효율성 제고 및 이용객 편의도모

사업기간	임기내 완료 ■ 임기후 지속 □	예산여부	예산 사업 ■ 비예산사업 □	사업비	국비 ■ 도비 □ 시비 □ 민자 □
사회보장제도 신설 협의	필 요 사 업 □ 불필요사업 ■	추진주체	국 가 ■ 지 자 체 □	총사업비	1,270백만원

□ 추진배경

□ 호남선 출발역이라는 높은 상징성에 비해 역사 노후 및 협소

□ 현재 78회 운행하나 2026년 이후에는 140회로 증편

- 용산역 KTX, 수서역 SRT 이외에도 부산, 수원, 인천, 강릉발 신설

□ 사업개요

□ 사업기간 : 2022 ~ 2025

□ 위    치 : 목포시 호남동 1-1, 목포역 일원

□ 사업내용 : 목포역 신축 및 철도시설 재배치

-  서남권 랜드마크형 신축역사 건립(470억)

-  준고속열차(EMU) 통합정비고 신설(460억)

-  철도궤도 재배치, 시스템 보강 등 시설 재배치(340억)

□ 사 업 비 : 총 1,270억원 (국비 990, 코레일 280)

□ 공약 검토 내용

□ 재원확보 방안 : 국토교통부와 한국철도공사 비용 부담(전액국비)

□ 연차별 추진계획

연도별	추진 사항		달성도(%)
2022	연도별 목표	목포역 대개조 사업 당위성 확보	20%
	추진계획	목포역 대개조 사업 국비반영 요청
2023	연도별 목표	목포역 대개조 사업 추진	40%
	추진계획	목포역사 신축 실시설계 및 국비반영
2024	연도별 목표	목포역 대개조 사업 추진	60%
	추진계획	목포역사 신축 및 철도시설 재배치
2025	연도별 목표	목포역 대개조 사업 추진	80%
	추진계획	목포역사 신축 및 철도시설 재배치
2026	연도별 목표	목포역 대개조 사업 완료	100%
	추진계획	목포역사 신축 및 철도시설 재배치

□ 연차별 소요재원                           (단위 : 억원)

사업명	구분	충사업비	예산 투입현황					2026년 이후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년
계		1,270	1,270		200	360	360	350
목포역사 신축 및 철도시설 재배치	국비	1,270	1,270		200	360	360	350
	지방비	-						-
	민자	-						-

공약관리 실명제
구분	과장	담당	주무관
사전검토 보고	노기창 (2022.6. ~ 6.30.)	김광미 (2022.6. ~ 6.30.)	박제욱 (2022.6. ~ 6.30.)
실천계획(1차) 보고	이지홍 (2022.7.5. ~ 7.29.)	김광미 (2022.7.5. ~ 7.29.)	오애의 (2022.7.5. ~ 7.29.)
실천계획(2차) 보고	이지홍 (2022.7.5. ~ 7.29.)	김광미 (2022.7.5. ~ 7.29.)	오애의 (2022.7.5. ~ 7.29.)

담당부서		기획예산과장 이지홍 기획팀장 김광미 주무관 오애의