57. 농업지원센터 확대 이전

	【 취지 및 목표 】
❖ 도시와 농촌의 상생을 위한 건강한 도시농업 구현 ❖ 급속한 도시화에 따른 사회 환경 및 농업 기반 개선

사업기간	임기내 완료 ■ 임기후 지속 □	예산여부	예산 사업 ■ 비예산사업 □	사업비	국비 ■ 도비 □ 시비 ■ 민자 □
사회보장제도 신설 협의	필 요 사 업 □ 불필요사업 ■	추진주체	국 가 □ 지 자 체 ■	총사업비	2,000백만원

□ 사업 개요

□ 사업기간 : 2023. 1 ~ 2026. 6

□ 위    치 : 미정(삼향동, 유달동 등)

□ 사 업 량 : 신규 및 증축 등

• 대  지 : 100평 ~ 300평 이내(시유지, 사유지)

• 건  물 : 지상 2층, 100평 규모(연면적 200평)

- 사무실, 교육장․대강당 등

• 주차장 등 확보

□ 사업비(추정) : 2,000백만원(균특 975  시비 1,025)

※ 예산확보 : 농촌진흥청 농촌지도기반조성사업(부지매입비 집행불가)

□ 추진계획

□ 2023. 1. ~  10 : 장소선정을 위한 의견수렴, 타당성 검토, 부지확정

□ 2024. 1 ~  6 : 사업추진계획 수립

□ 2024 10.     : 2025년 본예산에 실시 설계비 예산 확보

□ 2025. 1. ~ 9 : 설계완료 및 농진청 2026년도 사업예산 신청

□ 2025. 10.    : 2026년 본예산에 시설설치비(건축비) 등 예산확보

□ 2026. 1. ~  6. : 공사발주 및 착공·준공

□ 연도별 추진 목표

연도별	추진목표	달성도(%)
2023	장소선정을 위한 의견수렴, 타당성 검토, 부지확정	25
2024	사업추진계획 수립, 실시 설계비 2025년 본예산 반영	50
2025	설계완료 및 2026년도 국비, 시비 예산확보	75
2026	공사발주 및 착공·준공	100

□ 연차별 소요재원

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	예산 투입현황					2026년 이후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년
계		2,000	50	-	-		50	1,950
농업지원센터 확대 이전	국비	975		-	-	-	-	975
	도비	-	-	-	-	-	-
	시비	1,025	50	-	-		50	975
	기타	-	-	-	-	-	-	-

공약관리 실명제
구분	과장	담당	주무관
사전검토 보고	황금아 (2022.6.10. ~ 6.30.)	홍윤미 (2022.6.10. ~ 6.30.)	최호현 (2022.6.10. ~ 6.30.)
실천계획(1차) 보고	황금아 (2022.7.5. ~ 7.29.)	홍윤미 (2022.7.5. ~ 7.29.)	정희식 (2022.7.5. ~ 7.29.)
실천계획(2차) 보고	황금아 (2022.8.1. ~ 9.16.)	홍윤미 (2022.8.1. ~ 9.16.)	정희식 (2022.8.1. ~ 9.16.)

담당부서		농업정책과장 황금아 농업지원센터팀장 홍윤미 주무관 정희식