76. 해양레포츠센터 건립사업 추진

	【 취지 및 목표 】
❖ 해양레포츠 교육·훈련·체험할 수 있는 센터 조성으로 기반시설 확충하여 해양레포츠 이용인구 저변확대 및 활성화에 기여

사업기간	임기내 완료 □ 임기후 지속 ◼	예산여부	예산 사업 ◼ 비예산사업 □	사업비	국비 □ 도비 ◼ 시비 ◼ 민자 □
사회보장제도 신설 협의	필 요 사 업 □ 불필요사업 ◼	추진주체	국 가 □ 지 자 체 ◼	총사업비	7,500백만원

□ 사업 개요

□ 사업기간 : 2019. ~ 2025.

□ 위    치 : 목포시 죽교동 571-100번지(국유지 : 교육부)

□ 사 업 량 : 센터 1동, 계류시설 등

□ 사업내용 : 해양레포츠 교육, 체험, 계류시설 조성

□ 사 업 비 : 총 7,500백만원(도비50% 3,750, 시비50% 3,750)

□ 추진계획

□ ‘16.11.~‘18.6. 타당성조사 및 기본계획수립 용역, 전남도 투자심사(센터 건립 : 해상)

□ ‘19. 4. 사업계획변경(센터 건립 : 해상 → 육상)

□ ‘19. 9. 기본 및 실시설계용역 착수

□ ‘20. 7. 기본 및 실시설계용역 중지

- 사유 : 평화광장 구조개선사업 변경에 따른 센터 위치 조정 등

□ ‘21. 1. ~ 7. 주민(우미파크빌) 및 상가 진정민원 접수(조망권 상실, 소음 등)

□ ‘22.  9. 부지 사용 협의(목포해양대)

□ ‘22. 10. 사업위치, 기간 등 사업계획변경 요구(전남도)

□ ‘22. 10. 기본계획 및 타당성 재검토용역 발주

□ ‘22. 12. 기본 및 실시설계용역 재추진

□ ‘23.  3. 건축허가, 도로점용, 배수설비 등 관계부서 협의

□ ‘23.  6. 전라남도 투자심사

□ ‘23.  8. 전라남도 계약심사

□ ‘23. 10. 공사 착공(공사 기간 : 1년 6월)

□ 연차별 추진 목표

연도별	추진목표	달성도(%)
2022	사업계획변경, 설계용역 재추진	20
2023	행정절차 이행, 공사 발주 및 착공	40
2024	공사 추진	80
2025	공사 준공	100

□ 연차별 소요재원                           (단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	예산 투입현황					2026년 이후
			소계	2022년까지	2023년	2024년	2025년
계		7,500	7,500	4,636			2,864
해양레포츠센터 건립사업	도비	3,750	3,750	2,318			1,432
	시비	3,750	3,750	2,318			1,432

공약관리 실명제
구분	과장	담당	주무관
사전검토 보고	조영매 (2022.6.10. ~ 6.30.)	나창영 (2022.6.10. ~ 6.30.)	조기훈 (2022.6.10. ~ 6.30.)
실천계획(1차) 보고	조영매 (2022.7.5. ~ 7.29.)	임진택 (2022.7.5. ~ 7.29.)	조창우 (2022.7.5. ~ 7.29.)
실천계획(2차) 보고	조영매 (2022.8.1. ~ 9.16.)	임진택 (2022.8.1. ~ 9.16.)	조창우 (2022.8.1. ~ 9.16.)

담당부서		해양항만과장 조영매 해양레저팀장 임진택 주무관 조창우