100. 메인스타디움 종합경기장 건립의 차질없는 마무리

	【 취지 및 목표 】
❖ 2023년 제104회 전국체육대회 및 제43회 전국장애인체육대회의 개폐회식과 육상경기가 진행될 메인스타디움으로 차질없는 건립추진을 통해 성공적인 대회 개최 도모

사업기간	임기내 완료 □ 임기후 지속 □	예산여부	예산 사업 □ 비예산사업 □	사업비	국비 □ 도비 □ 시비 □ 민자 □
사회보장제도 신설 협의	필 요 사 업 □ 불필요사업 □	추진주체	국 가 □ 지 자 체 □	총사업비	92,000 백만원

□ 사업 개요

□ 사업기간 : 2019. 12. 9. ~ 2023. 7. 25.

□ 위    치 : 대양동 산124번지 일원

□ 사 업 량 : 연면적 26,468㎡, 지상3층, 관람석 16,468석

□ 사업내용 : 종합경기장 및 보조경기장 건립

□ 사 업 비 : 총 1,050억원(국비 200억, 도비 230억, 시비 620억)

□ 추진계획

□ 공사추진

- PC공사 추진                       : 2022. 1. ~ 2022. 11.

- 마감공사 추진                      : 2022. 5. ~ 2023. 5.

- 운동장 조성공사 추진               : 2022. 11. ~ 2023 .5.

□ 사전 육상 경기                   : 2023. 8.

□ 전국체전 개최                  : 2023. 10.

□ 연도별 추진 목표

연도별	추진목표	달성도(%)
2022	• 공사추진 - PC 공사 : 2022. 1. ~ 2022. 11. - 마감공사 : 2022. 5. ~ - 운동장 조성공사 : 2022. 11. ~	73
2023	• 사전육상경기 : 2023. 8. • 전국체전개최 : 2023. 10.	100

□ 연차별 소요재원

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	예산 투입현황					2026년 이후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년
계		105,000	105,000	93,500	11,500
목포종합경기장 건립	국비	20,000	20,000	20,000	0
	도비	23,000	23,000	23,000	0
	시비	62,000	62,000	50,500	11,500
	기타	0	0	0	0

공약관리 실명제
구분	과장	담당	주무관
사전검토 보고	교육체육과장 김대식 (2022.6.10. ~ 6.30.)	체육시설팀장 천승환 (2022.6.10. ~ 6.30.)	실무관 박치현 (2022.6.10. ~ 6.30.)
실천계획(1차) 보고	전국체전추진단장 정지숙 (2022.7.5. ~ 7.29.)	체전시설팀장 천승환 (2022.7.5. ~ 7.29.)	실무관 박치현 (2022.7.5. ~ 7.29.)
실천계획(2차) 보고	전국체전추진단장 정지숙 (2022.8.1. ~ 9.16.)	체전시설팀장 천승환 (2022.8.1. ~ 9.16.)	실무관 박치현 (2022.8.1. ~ 9.16.)

담당부서		전국체전추진단장 정지숙 체전시설팀장 천승환 주무관 박치현