103. 배드민턴 전용구장 건립

	【 취지 및 목표 】
❖ 배드민턴 전용구장 건립에 따른 체육시설 인프라 구축 및 목포시민들의 체력증진과 체육활동 여건 개선

사업기간	임기내 완료 □ 임기후 지속 □	예산여부	예산 사업 □ 비예산사업 □	사업비	국비 □ 도비 □ 시비 □ 민자 □
사회보장제도 신설 협의	필 요 사 업 □ 불필요사업 □	추진주체	국 가 □ 지 자 체 □	총사업비	8,500백만원

□ 사업 개요

□ 사업기간 : 2024년 ~ 2026년

□ 위    치 : 대양동 950번지(목포국제축구센터 내)

□ 사 업 량 : 배드민턴 전용구장 2,410㎡(730PY), 코트 10면

□ 사업내용 : 배드민턴 전용구장 건립 및 주차장 조성

□ 사 업 비 : 총 8,500백만원(국비 2,600, 시비 5,900)

□ 추진계획

□ 부지확보 및 계획수립                       :‘24. 10. ~‘24. 12.

□ 26년 균특회계 신청(전남도)                  :‘25. 01. ~‘25. 06.

□ 실시설계 및 사전행정절차 진행              :‘25. 07. ~‘25. 12.

□ 공사 착수 및 완료                          :‘26. 01. ~‘26. 12.

□ 연도별 추진 목표

연도별	추진 사항	③달성도(%)
2024	부지확보 및 계획수립	10
2025	2025년 균형발전특별회계 신청 , 실시설계 및 사전행정절차 진행	50
2026	공사 착수 및 사업완료	100

□ 연차별 소요재원                           (단위 : 백만원)

사업명	구분	충사업비	예산 투입현황					①2026년 이후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년
계		8,500					2,830	5,670
목포 배드민턴장 설치사업	국비	2,550					850	1,700
	시비	5,950					1,980	3,970

□ 위치도

목포국제축구센터 다목적구장 옆

공약관리 실명제
구분	과장	담당	주무관
사전검토 보고	김대식 (2022.6. ~ 6.30.)	천승환 (2022.6. ~ 6.30.)	노우균 (2022.6. ~ 6.30.)
실천계획(1차) 보고	김대식 (2022.7.5. ~ 7.29.)	문상규 (2022.7.5. ~ 7.29.)	국현욱 (2022.7.5. ~ 7.29.)
실천계획(2차) 보고	김대식 (2022.8.1. ~ 9.16.)	문상규 (2022.8.1. ~ 9.16.)	국현욱 (2022.8.1. ~ 9.16.)

담당부서		교육체육과장 김대식 체육시설팀장 문상규 주무관 국현욱