104. 전천후 테니스 전용구장 신설

	【 취지 및 목표 】
❖ 테니스·정구장 건립에 따른 체육시설 인프라 구축 및 목포시민들의 체력증진과 체육활동 여건 개선

사업기간	임기내 완료 □ 임기후 지속 □	예산여부	예산 사업 □ 비예산사업 □	사업비	국비 □ 도비 □ 시비 □ 민자 □
사회보장제도 신설 협의	필 요 사 업 □ 불필요사업 □	추진주체	국 가 □ 지 자 체 □	총사업비	4,000백만원

□ 사업 개요

□ 사업기간 : 2023년 ~ 2024년

□ 위    치 : 용당동 1069-60번지 (구) 유달경기장 옆)

□ 사 업 량 : 테니스 및 정구장 5,400㎡(1,633PY)

□ 사업내용 : 테니스·정구장 코트정비 및 사무동 방수층 열화 및 전기                  설비보수, 막구조물 설치, 외부담장 및 안전울타리 전도                  현상 및 균열, 누수발생 보수 및 기초정비

□ 사 업 비 : 총 4,000백만원(국비 2,000, 시비 2,000)

□ 추진계획

□ 용역과제 사전 심의                         :‘22. 10.

□ 23년 본예산 수립                           :‘22. 12.

□ 실시설계 발주                              :‘23. 01. ~‘23. 03.

□ 공사 착수 및 완료                          :‘23. 04. ~‘23. 12.

□ 연차별 추진 목표(계획)

연도별	추진 사항	③달성도(%)
2022	국비 확보, 용역과제 사전 심의	80%
2023	공사 착수 및 사업 완료

□ 연차별 소요재원                           (단위 : 백만원)

사업명	구분	충사업비	예산 투입현황					①2026년 이후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년
계		4,000			4,000
목포 유달시립테니스장□정구장 개보수사업	국비	2,000			2,000
	시비	2,000			2,000

공약관리 실명제
구분	과장	담당	주무관
사전검토 보고	김대식 (2022.6. ~ 6.30.)	천승환 (2022.6. ~ 6.30.)	노우균 (2022.6. ~ 6.30.)
실천계획(1차) 보고	김대식 (2022.7.5. ~ 7.29.)	문상규 (2022.7.5. ~ 7.29.)	국현욱 (2022.7.5. ~ 7.29.)
실천계획(2차) 보고	김대식 (2022.8.1. ~ 9.16.)	문상규 (2022.8.1. ~ 9.16.)	국현욱 (2022.8.1. ~ 9.16.)

담당부서		교육체육과장 김대식 체육시설팀장 문상규 주무관 국현욱