107. 산업단지 근로자 복합문화센터 및 작업복 세탁소 설치

	【 취지 및 목표 】
❖ 산업단지에 부족한 편의시설 확충을 위해 다양한 시설이 집적된 복합문화센터 및 작업복 세탁소를 건립하여 근로자 복지환경 개선

사업기간	임기내 완료 ■ 임기후 지속 □	예산여부	예산 사업 ■ 비예산사업 □	사업비	국비 ■ 도비 ■ 시비 ■ 민자 □
사회보장제도 신설 협의	필 요 사 업 □ 불필요사업 ■	추진주체	국 가 □ 지 자 체 ■	총사업비	3,850백만원

□ 산업단지 근로자 복합문화센터

□ 위    치 : 연산동 1300번지(삽진산단, 現 공용주차장, 3,586㎡)

□ 사업기간 : 2022. 5. ~ 2025. 5.(3년간)

□ 사 업 비 : 3,850백만원(국비2,70070% 도비345 9% 시비805 21%,부지확보)

□ 사업내용 : 산업단지 근로자 복합문화센터 건립

□ 건축규모 : 본관 3층 1,130㎡

□ 추진일정

- 공모사업 선정                           : 2022. 3.

- 공유재산 심의 및 재정투자심사           : 2022. 8.

- 건축 기획 및 심의(국가공공건축기획센터) : 2022. 9. ~ 12.

- 건축기본 및 실시설계 용역               : 2023. 1.

- 산업단지 복합문화센터 착공 및 준공      : 2023. 6. ~ 2025. 5.

□ 노동자 작업복 세탁소

- 산단 내 노동자 작업복 세탁소 건립 용역 : 2021. 9 ~ 11.

• 작업복 세탁소 건립은 다양한 방안(신축, 리모델링, 유상임대)을 검토한 결과,  우리시에서 추진 중인 산단 내 복합문화센터 건립 부지 내에 별도 건물 건립 추진이 가장 적절한 것으로 판단

※ 당초에는 근로자 복합문화센터 건물 내에 근로자 세탁소를 포함 추진하려 하였으나, 세탁기계 소음·진동, 오폐수 등의 효율적 관리를 위해 세탁소는 별도 건축 결정

• 세탁소 건립의 재정 확보를 위해 고용부 주관 산업재해 예방시설 사업 공모를 통한 사업 추진이 타당하다고 판단

- 2022년부터 산업단지 산재예방시설 공모사업 신청자격이 ①산업단지 관리주체(산단공 또는 협의체) ②산업단지 내 입주 사업장 ③사업주단체로 변경됨에 따라 지자체에는 지원 불가

• 산단 내 입주기업 협의체가 구성되어 있으나, 사업자 부담금 50% 및 설치 공간 제공 등 입주기업의 부담이 상당함

⇒ 산단 입주기업협의회와 노동자 작업복 세탁소 설치 공모사업을 추진하는 한편, 시비 확보가 가능하다면 전액 시비로 설치하는 방안도 고려

□ 연도별 추진 목표

연도별	추진목표	달성도(%)
2022	○ 산업단지 근로자 복합문화센터 건립관련 사전절차 이행 - 공유재산 심의, 지방재정투자심사, 건축기획 및 심의	10
2023	○ 산업단지 근로자 복합문화센터 건축기본 및 실시설계 용역 ○ 산업단지 근로자 복합문화센터 착공 ○ 노동자 작업복 세탁소 공모사업 추진 및 예산 확보	50
2024	○ 노동자 작업복 세탁소 설치 추진	80
2025	○ 산업단지 복합문화센터 준공 및 운영 ○ 노동자 작업복 세탁소 설치 및 운영	100

□ 연차별 소요재원                           (단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	예산 투입현황					2026년 이후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년
계		3,850
산업단지 근로자 복합문화 센터 건립	국비	2,700	2,700	700	900	1,100
	도비	345	345	-	115	115	115
	시비	805	805	-	269	268	268
	기타	-	-	-	-	-	-	-

※ 노동자 작업복 세탁소 예산 제외(미정)

공약관리 실명제
구분	과장	담당	주무관
사전검토 보고	나재형 (2022.6.10. ~ 6.30.)	김정연 (2022.6.10. ~ 6.30.)	김은주 (2022.6.10. ~ 6.30.)
실천계획(1차) 보고	나재형,차명신 (2022.7.5. ~ 7.29.)	김정연,김해수 (2022.7.5. ~ 7.29.)	김은주,윤성현 (2022.7.5. ~ 7.29.)
실천계획(2차) 보고	차명신 (2022.8.1. ~ 9.16.)	김해수 (2022.8.1. ~ 9.16.)	윤성현 (2022.8.1. ~ 9.16.)

담당부서		지역경제과장 차명신 산업지원팀장 김해수 주무관 윤성현