108. 도서지역 종합개발사업 추진

	【 취지 및 목표 】
❖ 관내 도서지역의 정주환경 개선 및 관광 및 교통 인프라 확충을 통해 주민들의 삶의 질 및 소득수준 향상에 기여

사업기간	임기내 완료 □ 임기후 지속 ■	예산여부	예산 사업 ■ 비예산사업 □	사업비	국비 ■ 도비 ■ 시비 ■ 민자 □
사회보장제도 신설 협의	필 요 사 업 □ 불필요사업 ■	추진주체	국 가 □ 지 자 체 ■	총사업비	199억원

□ 사업 개요

□ 사업기간 : 2018년 ~ 2027년(10년간)

□ 위    치 : 달리도, 율도, 외달도 등 관내 유인도서

□ 사 업 량 : 달리도~외달도 보행연도교 개설사업 등 14개 사업

□ 사업내용 : 도서지역 정주환경 개선 및 교통·관광 인프라 확충 등

□ 사 업 비 : 총 199억원(국비 159(80%), 도비 20(10%), 시비 20(10%))

□ 추진계획

□ 2022년 달리도 복합커뮤니티센터 조성 및 달리도 선착장~쪽박섬간 연결도로 추진

- 사업내용

· 복합커뮤니티센터 : 지상1층 연면적109.15㎡, 사업비 720백만원

· 달리도 선착장~쪽박섬간 연결도로 : L=500m, B=3m 사업비 570백만원

□ 2022년~2025년까지(3년) 달리도~외달도 보행연도교 개설공사 추진     - 사업내용 : 보행연도교 개설 L=636m(교량부 450m), B= 2.5~6.3m, 사업비 140억원

- 예산 편성 상황에 따라 차수별 공사 추진

□ 2026년 주민의견 수렴 목포시 자체 도서종합개발계획 수립 및 행정안전부 제5차 도서종합개발 계획 반영

□ 연도별 추진 목표

연도별	추진 목표		달성도(%)
2022	연도별 목표	도서지역 주민복지시설 및 교통개선	25%
	추진계획	달리도 커뮤니티센터 공사 완료, 달리도 선착장~쪽박섬간 연결도로(1차분)L=138m완료 달리도~외달도간 보행연도교 착수
2023	연도별 목표	도서지역 교통개선 및 도서간 연결 인프라 확충	50%
	추진계획	달리도 선착장~쪽박섬간 연결도로(2차분) L=362m완료 달리도~외달도간 보행연도교 기초 말뚝 설치
2024	연도별 목표	도서간 연결 인프라 확충	75%
	추진계획	달리도~외달도간 보행연도교 연결도로 및 하부 구조물 설치
2025	연도별 목표	도서간 연결 인프라 확충	100%
	추진계획	달리도~외달도간 보행연도교 연결도로 및 상부 구조물 설치 및 기타 잔여 공사 추진
2026	연도별 목표	행정안전부 5차 도서종합개발계획 반영
	추진계획	주민의견 수렴 및 목포시(자체) 도서지역 종합개발계획 수립
2027이후	연도별 목표	행정안전부 제5차 도서종합개발사업 반영 및 사업추진
	추진계획	제5차 도서종합개발사업 추진

□ 연차별 소요재원

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	예산 투입현황						2026년 이후
			소계	2021년까지	2022년	2023년	2024년	2025년
계		19,875	19,875	8,702	1,590	3,421	2,500	2,500	1,162
제4차 섬(도서)종합개발사업	국비	15,900	15,900	6,960	1,272	2,737	2,000	2,000	931
	도비	1,988	1,988	871	159	342	250	250	115.5
	시비	1,988	1,988	871	159	342	250	250	115.5
	기타

공약관리 실명제
구분	과장	담당	주무관
사전검토 보고	손영란 (2022.6. ~ 6.30.)	백무황 (2022.6. ~ 6.30.)	정성훈 (2022.6. ~ 6.30.)
실천계획(1차) 보고	조영매 (2022.7. ~ 8.)	나창영 (2022.7. ~ 8.)	강기한 (2022.7. ~ 8.)
실천계획(2차) 보고	조영매 (2022.7. ~ 8.)	나창영 (2022.7. ~ 8.)	강기한 (2022.8.1. ~ 9.16.)

담당부서		해양항만과장 조영매 도서관리팀장 나창영 주무관 강기한