122. 원도심 일대 근대 문화역사‘지붕없는 박물관’브랜드화

	【 취지 및 목표 】
❖ 목포 원도심의 근대역사문화공간 재생 활성화를 통한 근대건축자산을 보존 및 관리하고, 쾌적하게 가로경관을 정비하여 관광 환경 조성

사업기간	임기내 완료 ■ 임기후 지속 □	예산여부	예산 사업 ■ 비예산사업 □	사업비	국비 ■ 도비 ■ 시비 ■ 민자 □
사회보장제도 신설 협의	필 요 사 업 □ 불필요사업 ■	추진주체	국 가 □ 지 자 체 ■	총사업비	50,000백만원

□ 사업 개요

□ 사업기간 : 2019. ~ 2025. (※ 실제 사업 추진 2021. ~ 2025.)

□ 위    치 : 만호 ‧ 유달동 일대 근대역사문화공간

□ 사 업 량 : 면적 114,038㎡

□ 사업내용 : 우수 근대건축자산 매입 및 보수, 활용, 가로경관 개선, 관광자원화 추진(전시 및 체험공간 등 콘텐츠 구축)

□ 사 업 비 : 총 50,000백만원(국비 25,000, 도비 10,000, 시비 15,000)

□ 추진계획

□ ‵22. 9.     :「목포 근대역사문화공간 보전 및 활용에 관한 조례」일부개정 예정

□ ‵22. 7. ~ 12. : 근대건축자산 2차 매입 및 보수 추진

□ ‵22. 7. ~ 12. : 근대역사문화공간 경관회복 및 활용 사업 추진

- 지중화 ‧ 가로등 설치, 경관조명 설치, 골목길 정비, 편의시설 조성

- 오픈스페이스 조성(국도 1ㆍ2호선, 민어거리 진입로)

□ ‵23년 : 역사성 보존, 가로경관 정비(건물 입면파사드, 골목길 정비 등)

□ ‵24~25년 : 근대문화유산 관광자원화(실감형 콘텐츠, 전시 및 체험프로그램 확충)

※ ‘목포 근대역사문화공간 종합정비계획’에 따라 추진 중

□ 연도별 추진 목표

연도별	추진 사항		③달성도(%)
2022	연도별 목표	근대역사문화공간 경관회복	40%
	추진계획	근대건축자산 매입, 보수, 활용, 가로 경관회복
2023	연도별 목표	근대역사문화공간 경관회복	60%
	추진계획	근대건축자산 매입, 보수, 활용, 가로 경관회복
2024	연도별 목표	근대역사문화공간 관광자원화	80%
	추진계획	실감형 콘텐츠, 전시 및 체험프로그램 확충
2025	연도별 목표	근대역사문화공간 관광자원화	100%
	추진계획	실감형 콘텐츠, 전시 및 체험프로그램 확충
2026	연도별 목표	근대역사문화공간 관광자원화	추가달성
	추진계획	실감형 콘텐츠, 전시 및 체험프로그램 확충

□ 연차별 소요재원

(단위 : 백만원)

사업명	구분	충사업비	예산 투입현황					2026년 이후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년
계		50,000	31,810	3,810	8,000	8,000	4,000	4,180
목포 근대역사문화공간 재생 활성화 시범사업	국비	25,000	15,905	1,905	4,000	4,000	2,000	2,090
	도비	10,000	6,362	762	1,600	1,600	800	836
	군비	15,000	9,543	1,143	2,400	2,400	1,200	1,254
	기타	0	0	0	0	0	0	0

※ 문화재청 국고 확보 여부에 따라 총 사업예산은 변경될 수 있음

공약관리 실명제
구분	과장	담당	주무관
사전검토 보고	손영란 (2022.6.10. ~ 6.30.)	김만수 (2022.6.10. ~ 6.30.)	김형남 (2022.6.10. ~ 6.30.)
실천계획(1차) 보고	손영란 (2022.7.5. ~ 7.29.)	김만수 (2022.7.5. ~ 7.29.)	김형남 (2022.7.5. ~ 7.29.)
실천계획(2차) 보고	손영란 (2022.8.1. ~ 9.16.)	김만수 (2022.8.1. ~ 9.16.)	김형남 (2022.8.1. ~ 9.16.)

담당부서		도시문화재과장 손영란 역사공간조성팀장 김만수 주무관 김형남