126. 백련지구 공원 환경 리모델링 추진

	【 취지 및 목표 】
❖ 생활밀착형 도시공원 조성으로 2024년 산정공원 조성과 더불어 백련지구의 녹지쉼터 완성 ❖ 남녀노소 가족단위 이용도 높은 편익시설 증진 및 쾌적한 도시생활환경 조성

사업기간	임기내 완료 ■ 임기후 지속 □	예산여부	예산 사업 ■ 비예산사업 □	사업비	국비 □ 도비 ■ 시비 ■ 민자 □
사회보장제도 신설 협의	필 요 사 업 □ 불필요사업 ■	추진주체	국 가 □ 지 자 체 ■	총사업비	1,600백만원

□ 사업 개요

□ 사업기간 : 2022. ~ 2023.

□ 위    치 : 목포시 연산동 1952번지 외(백련지구 청호중학교 옆)

□ 사 업 량 : 리모델링 1식(공원 5개소 : 근린공원 1, 어린이공원 4)

□ 사업내용 : 경관 조명, 그늘막 등 편익시설, 놀이시설 정비, 수목식재 등

□ 사 업 비 : 총 1,600백만원(국비 1,200, 도비 230, 시비 170)

□ 추진계획

□‘22. 1. ~ 12. : 백련근린공원 경관조명 및 막구조파고라(1동) 설치

- ‘22.  1. : 시비(100백만원), 도비(230백만원) 확보

- ‘22.  8. : 특별교부금 1,200백만원 건의

- ‘22. 11. : 막구조파고라 설치완료

□‘23. 1. ~ 3. : 실시설계용역 추진

□‘23. 4. ~ 11. : 공사추진 및 준공

□ 연차별 추진 목표

연도별	추진 사항	달성도(%)
2022	백련근린공원 사업추진 (막구조파고라, 경관 조명 설치)	10%
2023	실시설계용역, 공사추진 및 준공	100%

□ 연차별 소요재원                           (단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	예산 투입현황					2026년 이후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년
계		1,600	1,600	330	1,270	-	-	-
백련지구 공원 리모델링	국비	1,200	1,200	-	1,200		-	-
	도비	230	230	230			-	-
	시비	170	170	100	70		-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-

공약관리 실명제
구분	과장	담당	주무관
사전검토 보고	박 진 홍 (2022.6. ~ 6.30.)	박 재 홍 (2022.6. ~ 6.30.)	전 욱 형 (2022.6. ~ 6.30.)
실천계획(1차) 보고	오 병 주 (2022.7.5. ~ 7.29.)	박 재 홍 (2022.7.5. ~ 7.29.)	전 욱 형 (2022.7.5. ~ 7.29.)
실천계획(2차) 보고	오 병 주 (2022.8.1. ~ 9.16.)	최 양 선 (2022.8.1. ~ 9.16.)	이 종 희 (2022.8.1. ~ 9.16.)

담당부서		공원녹지과장 오병주 공원시설팀장 최양선 주무관 정대균