127. 생활권 중심 건강걷기 녹색 둘레길 조성

	【 취지 및 목표 】
❖ 철도웰빙공원, 삼향천, 평화광장 등 도심 생활권에 건강걷기에 좋은 녹색 둘레길을 조성하여 시민의 삶의 질 향상에 기여

사업기간	임기내 완료 ■ 임기후 지속 □	예산여부	예산 사업 ■ 비예산사업 □	사업비	국비 □ 도비 □ 시비 ■ 민자 □
사회보장제도 신설 협의	필 요 사 업 □ 불필요사업 ■	추진주체	국 가 □ 지 자 체 ■	총사업비	500백만원

□ 사업 개요

□ 사업기간 : 2023. 1 ~ 2023. 10

□ 위    치 : 목포역 ~ 철도웰빙공원 ~ 삼향천 ~ 평화광장 ~ 남항 ~ 삼학도 ~ 목포역

□ 사 업 량 : 녹색둘레길 20km

□ 사업내용 : 웰빙공원 그늘목식재 200주, 삼향천 데크산책로 300m,

둘레길 구간 감성 디자인 사업, 인도포장 정비, 편의시설, 안내판, 이정표 설치 등

□ 사 업 비 : 500백만원(시비)

□ 추진계획

□ ‘23. 1. ~ ’23. 2. : 기본 및 실시설계 용역

□ ‘23. 3. ~ ’23. 9. : 녹색 둘레길 조성사업 추진

□ ‘23. 10.          : 공사 준공

□ ‘23. 10.          : 녹색 둘레길 걷기 행사 개최

□ 연도별 추진 목표

연도별	추진목표	달성도(%)
2022	추진계획 수립 및 행정절차 등 점검, 2023년 예산확보(기본구상 및 실시설계 용역, 사업추진)	30%
2023	기본 및 실시설계용역 추진, 사업추진, 둘레길 걷기행사 추진	100%

□ 연차별 소요재원

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	예산 투입현황					2026년 이후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년
계		500	500	-	500
생활권 중심 건강걷기 녹색둘레길 조성	국비			-
	도비			-
	시비	500	500	-	500
	기타

공약관리 실명제
구분	과장	담당	주무관
사전검토 보고	박 진 홍 (2022.6. ~ 6.30.)	서 성 수 (2022.6. ~ 6.30.)	임 성 기 (2022.6. ~ 6.30.)
실천계획(1차) 보고	오 병 주 (2022.7.5. ~ 7.29.)	서 성 수 (2022.7.5. ~ 7.29.)	임 성 기 (2022.7.5. ~ 7.29.)
실천계획(2차) 보고	오 병 주 (2022.8.1. ~ 9.16.)	김 영 범 (2022.8.1. ~ 9.16.)	임 성 기 (2022.8.1. ~ 9.16.)

담당부서		공원녹지과장 오병주 녹지팀장 김영범 주무관 임성기