148. 수도시설 현대화로 안전하고 깨끗한 물 공급

	【 취지 및 목표 】
❖ 20년 이상된 노후 수도시설 현대화 및 배수지 신설로 안전하고 안정적으로 수돗물 공급 ❖ ICT(정보통신기술)를 활용한 스마트 관망관리 시스템 구축으로 수도사고 위기대응체계 마련

사업기간	임기내 완료 √ 임기후 지속 □	예산여부	예산 사업 √ 비예산사업 □	사업비	국비 √ 도비 □ 시비 √ 민자 □
사회보장제도 신설 협의	필 요 사 업 □ 불필요사업 √	추진주체	국 가 □ 지 자 체 √	총사업비	36,892 백만원

□ 사업 개요

□ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년 (3개년)

□ 위    치 : 목포시 급수구역 일원

□ 사 업 비 : 369억원 【국비 231억원, 시비 138억원】

□ 사업내용

세 부 사 업 명	사 업 내 용	사 업 비(백만원)
		계	국비	시비	비고
계		36,892	23,136	13,756
지방상수도 현대화사업	노후 상수관망 정비(L=43.2㎞), 유수율 제고용역, 유지관리 시스템 구축 등	21,444	10,722	10,722
신항배수지 신설	배수지(3,500㎥) 송・배수관로 D450mm, L=1.3㎞	12,000	10,000	2,000
스마트 관망관리 인프라 구축	스마트관로 인식체계 구축 등 11사업	3,448	2,414	1,034

□ 추진계획

□‘22. 10. : 스마트 관망관리 인프라구축 사업 추진

□‘22. 12. :‘22년 노후 상수관망 정비사업(10개소) 완료

□‘23. 02. :‘23년 노후 상수관망 정비사업(5개소) 착공

□‘23. 03. :‘23년 유수율 제고용역 착수

□‘23. 04. : 신항배수지 신설사업 착공

□‘23. 09. : 스마트 관망관리 인프라구축 사업 완료

□‘23. 12. :‘23년 노후 상수관망 정비사업(5개소) 완료

□‘24. 03. :‘23년 유수율 제고용역 완료

□‘24. 04. : 신항배수지 신설사업 완료 및 통수

□‘24. 06. : 현대화사업 환경부 성과심사 및 사업완료

□ 연도별 추진 목표

연도별	추진목표	달성도(%)
2022	‘22년 노후 상수관망 정비사업(10개소) 완료, 스마트 관망관리 인프라구축 사업 추진	100%
2023	’23년 노후 상수관망 정비사업(5개소) 완료, ‘23년 유수율 제고용역 착수, 신항배수지 신설사업 착공, 스마트 관망관리 인프라구축 사업 완료	100%
2024	‘23년 유수율 제고용역 완료, 신항배수지 신설사업 완료 및 통수, 현대화사업 환경부 성과심사 및 사업 완료	100%

□ 연차별 소요재원

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	예산 투입현황					2026년 이후
			소계	2022년까지	2023년	2024년	2025년
합 계		36,892	36,892	17,289	17,603	2,000	-	-
소 계		21,444	21,444	13,841	7,603	-	-	-
지방상수도 현대화사업	국비	10,722		6,841	3,881	-	-	-
	도비	-		-	-	-	-	-
	시비	10,722		7,000	3,722	-	-	-
	기타	-		-	-	-	-	-

사업명	구분	총사업비	예산 투입현황					2026년 이후
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년
소 계		12,000	12,000	-	10,000	2,000	-	-
신항배수지 신설	국비	10,000		-	10,000	-	-	-
	도비	-		-	-	-	-	-
	시비	2,000		-	-	2,000	-	-
	기타	-		-	-	-	-	-
소 계		3,448	3,448	3,448	-	-	-	-
스마트 관망관리 인프라 구축	국비	2,414		2,414	-	-	-	-
	도비	-		-	-	-	-	-
	시비	1,034		1,034	-	-	-	-
	기타	-		-	-	-	-	-

공약관리 실명제
구분	과장	담당	주무관
사전검토 보고	강혜선 (2022.6.10. ~ 6.30.)	이주현 (2022.6.10. ~ 6.30.)	김신철 (2022.6.10. ~ 6.30.)
실천계획(1차) 보고	문명식 (2022.7.5. ~ 7.29.)	이주현 (2022.7.5. ~ 7.29.)	김신철 (2022.7.5. ~ 7.29.)
실천계획(2차) 보고	문명식 (2022.8.1. ~ 9.16.)	이주현 (2022.8.1. ~ 9.16.)	김신철 (2022.8.1. ~ 9.16.)

담당부서		수도과장 문명식 급수팀장 이주현 주무관 김신철