대양산단 진입도로 설계변경 유착 의혹 관련 보도에 대한 해명

□ 보도 언론 : 프라임경제(나광운기자, ‘15.12.31일 인터넷에 게재)

□ 보도 내용

○ 대양산단 진입도로 개설공사 준공일 하루를 앞두고 설계변경을 승인해 의혹을 사고 있다.

○ 12월 29일 공사 중지를 내리고 같은날 조경공사 7억5000만원과 도로 포장 덧씌우기 공사 3억5000만원 등 11억원이 증액된 설계변경을 승인해 갖가지 의혹이 일고 있다.

○ 당초 설계에서 8000여만원이던 조경공사가 10배에 가까운 금액으로 증액되고 포장 덧씌우기 역시 처음 사업 범위에서 벗어난 구역에 증액을 한 것으로 드러났다.

○ 29일 감독부서에서 공사 중지를 내렸지만 현재 시공사는 공사를 계속 진행 중이다.

□ 기사해명

◦ 공사기간 : 2011. 1. 24 ~ 2015. 12. 30

◦ 공 사 비 : 총괄분 30,839백만원(도급 25,195백만원, 관급 5,644백만원)

시행분(5차분) 9,704백만원(도급 7,719백만원, 관급 1,985백만원)

◦ 설계변경 승인내용 : 조경공사 790백만원

◦ 중지일자 : 2015. 12. 29

○ 조경공사 7억 9천만원 외 2건을 승인 하였으나 사업구역에서 벗어난 덧씌우기 공사 3억 8천만원은 승인해 주지 않았음

○ 공사 중지 후 진행중인 포장 공사가 일부 남아있어 마무리 차원에서 공사를 진행했던 사항임

○ 대양산단 진입도로는 전액 국비 사업으로 사업비 집행 후 남은 잔액은 전액 불용처리 원칙으로 금년 진입도로 개설공사가 준공 되면 잔여 사업비 사용이 곤란한 사항이었음

○ 이에 국토교통부와 협의(12월 21일, 12월 29일) 끝에 조경식재 공사는 별도 발주가 안 된다는 입장이었고 사업비 잔액 중 조경식재를 공사에 반영하여 추진하도록 12월 29일 협의가 완료되어 조경 식재 반영이 늦어진 사항임

○ 조경 식재 외 2건은 총 사업비 범위내에서 설계에 반영한 사항이며, 반영되면 공사기간을 연장해야 되나 식재가 곤란한 동절기인 점을 감안하여 우선 공사 중지를 하였고 식재가 적절한 시기(2월 중순)에 공사 재개하여 식재를 완료할 계획임

○ 조경 식재를 진입도로 개설공사에 반영하지 않으면 준공 후 시비로 별도 발주하여 진행했어야 될 사항이었으나 시비 절감을 위해 국토교통부와 협의 후 추진한 사항임