9

주요 투자사업 추진현황

9-1. 투자심사 대상사업

우리 목포시에서 ‘15년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2014년까지 집행사업비	2015년 소요사업비	2016년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척률(%)
목포시 종합장사시설건립	32,476	20,421	11,428	627	2015	2009	100%
오성식품 도축장이전	4,408	4,188	150	-	2015	2011	100%
서남권 수산종합지원단지조성	35,400	2,312	5,156	7,472	2018	2014	5%
찾아가고싶은섬 가꾸기사업	2,500	1,094	448	958	2017	2011	80%
시청각영어도서관 조성	2,514	108	1,881	525	2015	2010	100%
만호진 역사공원화 사업	7,300	7,150	150	-	2015	2012	100%
나눔봉사기념관 건립	10,200	-	-	10,200	2016	2008	5%
도시재생 선도지역사업	20,180	4,180	4,000	12,000	2017	2013	42%
용해2지구~백련펌프장간 하수관거 정비	18,550	3,297	2,258	12,995	2020	2011	10%
상동초기우수처리시설 설치사업	15,609	12,401	-	3,208	2017	2014	75%
대양이로하수처리분구 연계처리시설	9,681	7,134	-	2,547	2017	2014	75%
하수도정비중점관리지역정비	35,016	7,725	10,205	17,086	2021	2014	10%
남악신도시 하수처리장 증설	26,547	4,168	5,896	16,483	2017	2013	25%

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2015년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는경우 ‘15년말 기준으로 작성

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

목포시 종합장사시설 건립

담당자

노인장애인과

심경희(☎270-8862)

□ 사업목적 및 필요성

○ 재래식 화장장 이전 숙원사업 해결과 장례문화 확산에 대처하고자

민․관 공동으로 장사시설을 건립하여 One-Stop 장례서비스 제공

□ 사업개요

○ 기  간 : ‘10. 5 ~ ’15. 6

○ 위  치 : 목포시 대양동 764-11번지 일원

○ 규  모 : 총 연면적 13,831㎡ (목포시 4,165㎡ . 민간 9,666㎡)

• 목포시 : 화장장, 봉안당, LPG저장소 / 민간 : 장례식장, 봉안당

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 32,476백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	32,476	20,421	11,428	627
국 비	5,220	2,860	2,360
시 도 비	642	321	321
시군구비	6,614	3,690	2,297	627
지 방 채
민간자본	20,000	13,550	6,450
기 타

○ 화장로 설비완공 및 시험운영 : ‘15. 8

○ 목포추모공원 개장 : ‘15. 11

□ 향후계획

○ 목포추모공원 정상운영 : ‘16. 1 ~

□ 사업변경 내역

(단위 : 백만원)

구 분	사업량	총사업비	사업기간	비 고
당 초	부지 50천㎡ 연면적 13,715㎡	29,400	‘10 ~ ’11
현 재	부지 61천㎡ 연면적 13,831㎡	32,476	‘10 ~ ’15	민간자본 증

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

(주)오성식품 도축장 이전사업

담당자

농업산업과

주  봉  길  (270-3373)

□ 사업목적 및 필요성

○ 『(구)석현산업단지』가 2000.6.30. 공업지역에서 일반주거지역으로 도시계획 변경

되고, 도축장 인근에 대단위아파트 단지가 조성되면서 도축장 악취와 소음에        관한 민원이 지속적으로 제기되어 이전 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 9 ~ 2015. 7. 31

○ 위 치 : 목포시 석현동 714번지 일대

○ 규 모 : 지상 1층(7,542㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,408백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	4,408	4,188	220
국 비
시 도 비	70		70
시군구비	4,338	4,188	150
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 2015. 7. 23 : 도시계획시설 도축장 완료 공고(대양동 산82-6 일원)

□ 향후계획

○ 2015. 12.   : 이전 후 구)도축장 건물 철거 및 우․오수관로 설치

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

서남권 수산종합지원단지 조성사업

담당자

해양수산과 이근직

(☎270-8229)

□ 사업목적 및 필요성

○ 북항으로 어항기능이 이전됨에 따라 수산물의 생산ㆍ가공ㆍ유통ㆍ물류기능을

종합적으로 지원하는 수산종합지원단지 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2018

○ 위 치 : 목포시 고하대로 597번길 118번지 외(북항배후부지)

○ 규 모 : 부지 118,843㎡, 건물연면적 27,300㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 35,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	35,400	2,312	5,156	7,472	20,460
국 비	17,700	1,156	2,578	3,736	10,230
시 도 비
시군구비	7,080	462	1,031	1,494	4,093
지 방 채
민간자본	10,620	694	1,547	2,242	6,137
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

○ 기본 및 타당성조사 연구용역(목포수협) : 2011. 12

○ 신규사업 예산확정 : 2014. 01

○ 기본 및 실시설계 용역계약 : 2015. 02

○ 사업규모 및 총사업비 등 협의(해수부, 기재부) : 2015. 08 ~ 현재

□ 향후계획

○ 실시설계 및 총사업비 등 협의 완료 : 2016. 10

○ 공사 및 감리용역 계약 : 2016. 11

○ 착공, 공사시행 및 준공 : 2016. 12 ~ 2018. 09

○ 시험운영 및 개장 : 2018. 10 ~ 11

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : 27,300㎡ → 14,001㎡

○ 사업기간 : 2014~2016 → 2014~2018

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

외달도 찾아가고 싶은섬 가꾸기사업

담당자

해양수산과 윤재웅

(☎270-8328)

□ 사업목적 및 필요성

○ 외달도의 특성을 토출하여 도서민의 일자리와 소득을 창출하고 지역경제 활성화에 기여하기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 ~ 2017년

○ 위 치 : 목포시 달동 외달도

○ 규 모 : 외달도 어구 부수보관시설 확충 등 8개 사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원(국비 2,000 도비 250 시비 250)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	2,500	1,094	448	758	200
국 비	2,000	906	358	606	160
시 도 비	250	95	46	74	20
시군구비	250	93	44	78	20

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  80%)

○ 2012. 12월 : 물양장 확충(A=637.5㎡), 정원가꾸기 완료

○ 2013. 12월 : 해수풀장 수질관리 시설, 하수시설 건축물 경관개선 완료

○ 2014. 1월~ 2015. 7월 : 기본계획 변경(행정자치부 협의)

○ 2015. 12월 : 어구보수보관시설 확장 공사, 3상전기 인입 완료

○ 2016. 현재 ~ : 다솜센터, 산책로 등 추진 및 주민역량강화 교육 실시

□ 향후계획

○ 2016. 12. ~ : 외달도 다솜센터 건립 및 산책로 조성 완료

○ 2017. 12. : 저온저장 시설 및 주민역량강화 교육 완료

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

목포 시청각영어도서관 건립공사

담당자

문화예술과

이용헌(☎270-8566)

□ 사업목적 및 필요성

○ 글로벌 시대, 영어 특성화 도서관을 조성하여 지역간 독서․교육․문화격차 해소

○ 자신의 수준에 맞는 도서를 쉽고, 재미있게 읽을 수 있도록 열린 교육 공간 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 6 ~ 2015. 6(‘14. 12월 착공)

○ 위 치 : 목포시 옥암로 186번길 30-11(어린이도서관 옆)

○ 규 모 : 연면적 935.05㎡(지상 2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,514백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,514	108	1,881	525
국 비	1,000		1,000
시 도 비
시군구비	1,514	108	881	525
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 실시설계 및 용역완료 : 2013. 10 ~ 2014. 10월

○ 영어도서관 준공 :　2015.　６월

□ 향후계획

○ 영어도서관 집기류 등 비품구입 비치 : 2016. 1 ~ 2016. 3월

○ 영어도서관 개관 :　2016.  3 월

○ 독서·문화프로그램 개발·운영 및 도서 확충 : 2016. 3 ~ 지속

□ 사업변경 내역

○ 사업비 변경

- 당초 : 3,000백만원(국비 1,000, 도비 300, 시비 1,700)

- 변경 : 2,514백만원(국비 1,000, 시비 1,514

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

목포진 복원 및 역사공원 조성사업

담당자

문화예술과

이제만(☎270-8320)

□ 사업목적 및 필요성

○ 목포의 태동을 알리는 문화유산인 목포진 복원 필요

○ 역사의식 제고 및 문화유산 보존 역사교육의 장으로 활용 및 관광인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2004 ~ 2014(‘14. 12월 착공)

○ 위 치 : 목포시 만호동 1-6번지 일원

○ 규 모 : 공원면적 6,601㎡(객사 1동 92.6㎡, 내삼문 16.5㎡)

- 녹  지 : 식재 1,800㎡, 포장 980㎡

- 시설물 : 정자 1, 벤치 33, 난간 151m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	7,300	6,550	600	150
국 비	3,900	3,900
시 도 비	650	650
시군구비	2,750	2,000	600	150
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘04.  ~ '10 : 행정절차 이행

- 지방재정 투․융자심사, 기본계공유재산 심의․관리계획 승인 등획 수립

○ ‘11 ~ ‘12.  8 : 문화재 발굴조사 및 토지·지장물 보상 철거 완료

○ '12. 12. : 설계용역 착수

○ ‘14. 12 : 문화재 현상변경, 공원조성 및 건설기술 심의 완료

○ ‘14.  1 : 목포진 객사 및 역사공원 공사 착수

○ '14. 12 : 목포진 역사공원 개장

○ '15. 8. : 목포진 역사공원 주변 도로 정비

□ 사업비 변경 내역

○ 없음

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

나눔봉사기념관 건립

담당자

도시재생과 정인선

(☎270-8744)

□ 사업목적 및 필요성

○ 호남지역 첫 선교지 의미를 복원하고 성지순례의 메카로 발전시키기

위한 성지를 조성하여 천주교 신자 방문명소 및 관광객 유치

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2016

○ 위 치 : 목포시 산정동 90-1번지 일원

○ 규 모 : 기념관 8,153.42㎡(지1층/4층)

※ 가톨릭성지 조성사업 건축허가 : 2006. 7. (착공 2008. 5.)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	10,200	-	-	10,200	-
국 비	2,550	-	-	2,550	-
시 도 비	1,020	-	-	1,020	-
시군구비	1,530	-	-	1,530	-
지 방 채		-	-		-
민간자본	5,100	-	-	5,100	-
기 타		-	-		-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ '15. 1. : 나눔봉사기념관 사업계획 반영(국비보조)

○ '15. 8. : 사업부지 토목공사 완료

○ '15. 9. : 사업시행 협약변경(성지조성 사업규모 축소조정)

□ 향후계획

○ 16년 12월 나눔봉사기념관 건축공사 완료

※ 사업기간 변경예정 : 2017. 6. 30.

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

목포시 도시재생 선도지역 사업

담당자

도시재생과

김덕훈(☎270-3687)

□ 사업목적 및 필요성

○「도시재생활성화 및 지원에 관한 특별법」에 의거, 도시쇠퇴로 재생이 시급하고 주변으로 파급효과가 큰 목원동 일대를 도시재생 선도지역으로 선정, 경제활력 회복과 일자리 창출을 위한 기반 조성

□ 사업개요

○ 기    간 : 2014~2017년

○ 위    치 : 목원동 일원(면적 600,000㎡)

○ 사업내용 : 관광루트 조성, 게스트하우스, 지붕 경관사업, 공가 활용사업, 목포특화장터사업, 주민역량강화 사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년까지	2016년	2017년
계	20,180	-	4,180	8,000	8,000
국 비	10,090	-	2,090	4,000	4,000
시 비	10,090	-	2,090	4,000	4,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 42%)

○ 목포시 도시재생 선도지역 사업 활성화계획 수립에 따른 마중물 세부 추진사업 전체 발주 (10개소), 공사 및 용역 진행중

□ 향후계획(2016~2017)

○ 게스트 하우스 사업자 공모 및 조성공사 시행(6.13 공모, 7월중 선정)

○ 문화예술거리 및 작가의 집 조성 사업자 공모 및 공사시행

○ 2016 목원음식문화축제(먹․통축제) 및 남행열차 포차 운영(12대)

○ 주택개량 지원 및 경관관리사업 마을학교 및 집수리단 운영

○ 커뮤니티센터(구, 엘레강스 건물) 리모델링 및 개관(10월중)

○ 청년몰 창업 및 일자리창출 마을학교 운영 및 사업시행

○ 크리스마스트리문화축제 및 프리마켓 운영 지원

○ 기타 사업 추진(정감있는 마을조성, 마을 기반시설, 주민 공모‧제안사업 등)

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

용해2지구~백련펌프장 하수관거정비사업

담당자

하수과 이주현

(☎ 270-3537)

□ 사업목적 및 필요성

○ 용해2지구 일원의 배수유역에서 발생되는 우수를 신속히 배제하여 침수       방지 및 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2020년

○ 위 치 : 용해2지구 ~ 백련펌프장(압해대교 아래)

○ 규 모 : 하수관거 정비 L=1,384m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,550백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	18,550	800	2,497	2,258	12,995
국 비	12,985	500	2,497	1,998	7,990
시 도 비
시군구비	5,565	300		260	5,005
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ‘14.  3. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ ‘15. 1.∼6. : 설계자문, 건설기술심의, 도시관리계획 변경결정 및 지형도면 고시

○ ‘15.  9. : 도시계획시설사업 실시계획 인가고시

□ 향후계획

○ ‘16.  1. : 토지 및 지장물 보상 추진

○ ‘16.  6. : 재원협의(영산강유역환경청) 및 목포시 일상감사, 계약심의 완료

○ ‘16.  9. : 조달청 원가심사 및 공사착공 예정

○ ‘20. 12. : 공사준공 예정

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

상동초기우수처리시설 설치사업

담당자

하수과 이주현

(☎ 270-3537)

□ 사업목적 및 필요성

○ 오염부하량이 높은 초기우수의 적정처리로 공공수역 수질오염 예방과 버스

터미널 앞 저지대 상습침수 문제의 근원적 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010년 ~ 2017년

○ 위 치 : 목포시 상동 버스터미널 앞

○ 규 모 : 저류조 V=10,000㎥, 차집시설 1식, 우수 암거개량 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,069백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	15,609	10,522	1,879		3,208
국 비	10,926	9,049	1,877
시 도 비
시군구비	4,683	1,473	2		3,208
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ ‘13.  4. : 기본 및 실시설계용역 완료 및 공사착공

○ ‘15.  8. : 기계실 기초지반 파일시공

○ ‘15. 10. : 기계실 가시설 및 지하 터파기

○ ‘15. 12. : 기계실 구조물 설치완료

□ 향후계획

○ ‘16.  1. : 우수저류조(1단계)준공

○ ‘16.  3. : 차집시설, 우수관로 등 잔여공사(2단계) 착공

○ ‘17. 12. : 공사 총괄분 준공예정

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

대양이로하수처리분구 연계처리시설

담당자

하수과 이주현

(☎ 270-3537)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하수 미처리구역인 대양하수처리분구의 하수를 북항 하수처리시설에 연계

처리하여 공공수역 수질오염예방과 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010년 ~ 2017년

○ 위 치 : 목포시 대양동 국도1호선 대체우회도로 일원

○ 규 모 : 중계펌프장 2개소, 압송관 5.1km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,681백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	9,681	6,204	930		2,547
국 비	4,840	4,840
시 도 비	483	483
시군구비	4,358	881	930		2,547
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○  ‘13.  3.  : 총괄 및 1차분 공사(압송관로 0.8km) 착공

○  ‘15.  5.  : 이로펌프장 구조물 및 압송관로 5.1㎞완료

○  ‘15.  8.  : 4차분(이로펌프장 기계시설 및 부대공)착공

□ 향후계획

○  ‘16.  4. : 4차분 공사 준공

○  ’17. 12. : 공사 총괄분 준공예정

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

하수도정비 중점관리지역 정비

담당자

하수과 정성훈

(☎270-8627)

□ 사업목적 및 필요성

○ 최근 침수피해가 발생하여 하수도정비 중점관리지역으로 지정한 지역에       하수도시설 확충 등 정비를 추진하여 도시침수 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2021년

○ 위 치 : 목포시 용당1․2동, 상동, 하당동 일원

○ 규 모 : 관거정비 L=1.85km, 빗물펌프장 2개소, 제어관리시스템 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 35,016백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	35,016	520	7,205	10,205	17,086
국 비	24,511	300	7,203	10,205	6,803
시 도 비
시군구비	10,505	220	2	-	10,283
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ‘13.  2. : 하수도정비 중점관리지역 지정 고시(환경부)

○ ‘14.  5. : 하수도정비 중점관리지역 기본계획 승인(환경부)

○ ‘14.  9. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ ‘15.  3. : 남해 배수펌프장 기술진단용역

○ ‘15.  9. : 남해 배수펌프장 기계제작 및 설치 준공

○ ‘16.  7. : 행정절차 이행중(영산강천 재원협의)

□ 향후계획

○ ‘15. 10. : 공사 착공

○ ‘21. 12. : 공사 준공

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

남악신도시 하수처리장 증설사업

담당자

하수과 정성훈(☎270-8627)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남악신도시의 활성화로 유입인구의 지속 증가에 따라 배출되는 하수량도       증가하고 있어 장래 하수처리시설 증설 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2017년

○ 위 치 : 옥암동 1,376번지(남악신도시 하수처리장내)

○ 규 모 : 시설용량 10,000㎥/일 증설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 26,547백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	26,547	2,468	1,700	5,896	16,483
국 비
시 도 비
시군구비	11,609	20	500	1,500	9,589
지 방 채
민간자본
기 타	14,938	2,448	1,200	4,396	6,894

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ ‘13.  3. : 하수처리장 증설 협약 및 용역과제 사전심의

○ ‘13.  5. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ ‘13.  8. : 10,000㎥/일 증설 실무협의 결정(무안군, 전남개발공사)

○ ‘14.  7. : 기본설계 실무협의(전남개발공사, 무안군)

○ ‘15.  5. : 원가심사(조달청)

○ ‘15.  7. : 공공하수도 설치(변경) 인가

○ ‘15. 12. : 총괄분 및 1차분 착공

○ ‘16.  6. : 전기 및 계측제어 공사 착공

□ 향후계획

○ ‘17. 12. : 공사 준공

9-2. 지방채 발행사업

우리 목포시에서 ‘15년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
	해		당		없		음

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2015년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

9-3. 민간투자사업

우리 목포시에서 ‘15년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’14년까지 부담액	’15년 부담액	’16년 이후 부담 예정액
	해	당		없	음

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2015년까지는 집행액(결산기준), 2016년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비