109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 목포시에서 ‘16년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2015년까지 집행사업비	2016년 소요사업비	2017년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
나눔봉사기념관 건립	5,100	-	2,441.8	2,658.2	2017	2013	85
도시재생 선도지역사업	20,000	8,000	6,000	6,000	2017	2014	85
행정타운부설주차장 조성	2,500	-	-	2,500	2018	2015	12
서산,온금 지구 재정비 촉진지구 기반시설조성	839,400	1,762	1,564	836,074	2020	2015	10
하수도정비 중점관리지역 정비사업	35,016	7,725	10,205	6,803	2020	2014	10
용해2지구~백련펌프장 하수관거정비사업	18,550	3,747	3,000	11,803	2020	2011	10%
남악신도시 하수처리장 증설	26,547	4,168	6,294	7,787	8,298	2013	60%
상동초기 우수처리시설 설치사업	15,069	12,401	0	700,	2508	2014	80%
등산로연결 구름다리 설치	3,600	600	1,000	2,000	2017	2015	45
세라믹산단 연결도로개설	2,600	0	600	0	2018	2015	30

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2016년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는경우 ‘16년말 기준으로 작성

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

나눔봉사기념관 건립

담당자

도시재생과

김덕철(☎270-8744)

□ 사업목적 및 필요성

○ 호남지역 첫 선교지 의미를 복원하고 성지순례의 메카로 발전시키기 위한 성지를 조성 천주교 신자 방문명소 및 관광객 유치

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2018년

○ 위 치 : 목포시 산정동 90-1번지 일원

○ 규 모 : 지하1/지상4 연면적 8,153㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,100백만원(국 2,550 도 1,020 시1,530)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,100		2,441.8	2,658.2
국 비	2,550		1,497.6	1,052.4
시 도 비	1,020		599	421
시군구비	1,530		345.2	1,184.8
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   85%)

❍  '16.  4. : 나눔봉사기념관 공사계약 및 공사착공

❍  '16. 12. : 나눔봉사기념관 사업계획변경 승인(문화체육관광부)

□ 향후계획

○ '17.  9. 30 : 나눔봉사기념관 준공

○ ‘18. 12. 31 : 성당 및 부대시설 공사 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

도시재생 선도지역사업

담당자

도시재생과 김도관(☎270-3684)

□ 사업목적 및 필요성

○ 쇠퇴하고 경쟁력이 저하된 원도심을 지역주민 참여여 생활밀착 방식으로       도시환경, 지역환경 및 자산을 활용한 도시재생사업으로 지역활성 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2017

○ 위 치 : 전라남도 목포시 목원도 일원(60만㎡)

○ 규 모 : 도시재생 마중물 10개사업(세부단위사업 26개)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	20,000	8,0000	6,000	6,000
국 비	10,000	4,000	3,000	3,000	-
시 도 비	10,000	4,000	3,000	3,000	-
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ ‘14.  4. 28. : 도시재생 선도지역 선정(목포시)

○ ‘14. 12. 15. : 도시재생활성화계획 승인(국토부)

□ 향후계획

○ ‘17. 12. 31. : 도시재생 선도지역사업 완료

□ 사업변경 내역(해당없음)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

행정타운부설주차장 조성

담당자

도시재생과

김덕철(☎270-8744)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주차공간이 열악한 남교동 원도심 인근 중심상가 이용자 주차편의 및       행정타운 방문 민원인 편의 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2018년

○ 위 치 : 목포시 남교동 88-66번지 일원

○ 규 모 : 대지 1,294.4㎡, 지상3층 연면적 3,152㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원(시 2,500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	2,500	-	-	1,000	1,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   85%)

❍  15. 9 : 도시계획시설(주차장) 실시계획인가 고시

❍ '17. 7 : 계약심사 완료

❍ '17. 8 : 계약의뢰

□ 향후계획

○ '17.  9 : 행정타운부설주차장 착공

○ ‘18.  2 : 사업준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

서산,온금지구 재정비촉진지구 기반시설조성

담당자

도시재생과 김형중(☎270-3649)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후 및 불량주택이 밀집된 서산ㆍ온금지구를 유달산의 풍광과 다도해의 전망이 어우러진 친환경 주거공간으로 조성 및 지역균형발전도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2020년

○ 위 치 : 서산ㆍ온금ㆍ금화동 일원

○ 규 모 : 도로4개소 3.3km, 공원 46,362㎡, 녹지 9개소 19,485㎡, 주차장 2,364㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 839,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	839,400	1,762	1,564	4,000	832,074
국 비	19,700	881	782	3,000	15,037
시 도 비
시군구비	19,700	881	782	1,000	17,037
지 방 채
민간자본	800,000			-	800,000
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ‘16. 1월 ~ 12월 : 재정비촉진계획 변경 수립용역 착수 및 행정절차 완료

○ ‘17. 1월 ~ 4월 : 시 도시계획위원회 자문 및 전라남도 경관위원회 심의 완료

○ ‘17. 5월 ~ 8월 : 전라남도 도시계획위원회 심의 추진

□ 향후계획

○ ‘17. 9월 ~ : 토지거래허가구역 변경 추진 등 행정절차 이행

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

개별 투융자심사 사업 추진현황 (작성서식 예시)

- 사업별로 별지 작성

사업명

하수도정비 중점관리지역 정비사업

담당자

하수과 백무황(☎ 270-3537)

□ 사업목적 및 필요성

○ 최근 침수피해가 발생하여 하수도정비 중점관리지역으로 지정한 지역에       하수도시설 확충 등 정비를 추진하여 도시침수 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2020년

○ 위 치 : 목포시 용당1·2동, 상동 일원

○ 규 모 : 관로정비(입암천) L=1.85㎞, 빗물펌프장 2개소, 제어관리시스템 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 35,016백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	35,016	7,725	10,205	6,803	10,283
국 비	24,511	7,503	10,205	6,803
시 도 비
시군구비	10,505	222			10,283
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ‘14.  5. : 하수도정비 중점관리지역 기본계획 승인(환경부)

○ ‘14.  9. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ ‘16.  9. : 재원협의 완료(영산강유역환경청)

○ ‘16. 10. : 원가심사 및 계약의뢰(시 ⇒ 조달청)

□ 향후계획

○ ‘17.  2. : 공사착공(총괄분 및 1차분)

○ '18.  3. : 1차분 공사 준공(입암천 정비)

○ '20.  2. : 총괄분 공사 준공

개별 투융자심사 사업 추진현황 (작성서식 예시)

- 사업별로 별지 작성

사업명

용해2지구∼백련펌프장 하수관거정비사업

담당자

하수과 백무황(☎ 270-3537)

□ 사업목적 및 필요성

○ 용해2지구 일원의 배수유역에서 발생되는 우수를 신속히 배제하여 침수       방지 및 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2020년

○ 위 치 : 용해2지구 ~ 백련펌프장(압해대교 아래)

○ 규 모 : 하수관거 정비 L=1,384m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,550백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	18,550	3,297	2,258	1,598	11,397
국 비	12,985	2,997	1,998	1,598	6,392
시 도 비
시군구비	5,565	300	260	-	5,005
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ‘16. 6. : 재원협의 완료(영산강유역환경청)

○ ‘16. 7. : 원가심사 및 계약의뢰(조달청)

○ ‘16. 10. : 공사 착공(총괄분 및 1차분)

□ 향후계획

○ '17.  7. : 1차분 공사 준공(3.0×2.0@1련 L=406m)

○ '18.  4. : 2차분 공사 준공(3.0×2.2@1련 L=140m)

○ ‘20. 12. : 총괄 공사 준공

개별 투융자심사 사업 추진현황 (작성서식 예시)

- 사업별로 별지 작성

사업명

남악신도시 하수처리시설 증설사업

담당자

하수과 정성훈(☎ 270-8627)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남악신도시의 활성화로 유입인구의 지속 증가에 따라 배출되는 하수량도

증가하고 있어 장래 하수처리시설 증설 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2018년

○ 위 치 : 목포시 옥암동 1376번지(남악신도시 하수처리장 내)

○ 규 모 : 시설용량 10,000㎥/일 증설(기존 12,000㎥/일)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 26,547백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	26,547	4,168	6,294	7,787	8,298
국 비
시 도 비
시군구비	11,609	520	1,791	1,000	8,298
지 방 채
민간자본
기 타	14,938	3,648	4,503	6,787

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ ‘15. 12. : 공사 착공(총괄분 및 1차분)

○ ‘16.  4. : 2차분 공사 착공

○ ‘16.  6. : 전기 및 계측제어공사 착공(1차분)

□ 향후계획

○ ‘17.  3. : 3차분 공사 착공

○ ‘17.  4. : 유입동 벽체 및 상부 콘크리트 타설 완료

○ ‘18. 12. : 공사 준공

개별 투융자심사 사업 추진현황 (작성서식 예시)

- 사업별로 별지 작성

사업명

상동초기우수처리시설 설치사업

담당자

하수과 백무황(☎ 270-3537)

□ 사업목적 및 필요성

○ 오염부하량이 높은 초기우수의 적정처리로 공공수역 수질오염 예방과 버스

터미널 앞 저지대 상습침수 문제의 근원적 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010년 ~ 2018년

○ 위 치 : 목포시 상동 버스터미널 앞

○ 규 모 : 저류조 V=10,000㎥, 차집시설 1식, 우수 암거개량 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,069백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	15,609	12,401		700	2,508
국 비	10,926	10,926
시 도 비
시군구비	4,683	1,475		700	2,508
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ ‘13.  4. : 기본 및 실시설계용역 완료 및 공사착공

○ ‘16.  1. : 1단계 사업 준공(저류조 설치완료)

○ ‘16.  3. : 2단계 사업 착공(우수암거, 차집시설, 전기실 등)

○ ‘16. 10. : 우수암거 설치

□ 향후계획

○ ‘17.   3. : 2차분 공사 착공

○ ‘17.   7. : 3차분 공사 착공

○ ‘18.  12. : 총괄분 공사 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

등산로 연결 구름다리 설치

담당자

공원녹지과

전 욱 형(☎270-8344)

□ 사업목적 및 필요성

○ 입암산과 용라산 사이 백년로 단절구간 산맥연결사업추진으로 단절된

산림생태축 연결, 부족한 등산 여가공간 확충, 트레킹길 기반구축 등 활력

있는 산림 문화공간창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2017(3년간)

○ 위 치 : 이로동주민센터 ~ 광장주유소 사이

○ 규 모 : 생태터널 연결 1식(L=100m, B=34m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계		600	1,000	2,000	-
국 비	1,800	300	500	1,000	-
시 도 비
시군구비	1,800	300	500	1,000	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45 %)

○ ‘16. 11. : 실시설계 및 사전 행정절차 완료

○ ‘17. 01. : 공사 착공

○ ‘17. 07. : 중앙분리대 및 외측부 암파쇄, 기초 콘크리트 타설

□ 향후계획

○ ‘17. 10. : 파형강판 및 토공사 완료

○ ‘17. 12. : 수목 및 화훼류 식재

○ ‘17. 06. ~ 12. : 하당 트레킹길 생태터널 구간 연결로 조성

○ ‘18. 01. : 공사 준공 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업명 변경 : 당초] 등산로 연결 구름다리 설치 → 변경] 입암산~용라산 산맥연결(생태터널) 설치

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

세라믹산단 연결도로개설

담당자

도시계획과 강기한(☎270-3445)

□ 사업목적 및 필요성

○ 목포시 산단내 도로망 확충을 통한 삽진산단과 세라믹산단 물류운송비용 절감 및 투자여건개선을 통한 산단활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1. ~ 2018. 12.

○ 위 치 : 목포시 연산동 세라믹산단 주변

○ 규 모 : 도로개설 L= 270m, B= 20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,600 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	2,600		600	-	2,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   30%)

○ ‘15. 7월 : 실시설계용역 완료

○ ‘15. 8월 : 실시계획 인가

○ ‘15. 9월 ~ 현재까지 :  토지 및 지장물 보상(70%)

□ 향후계획

○ 예산확보 후 잔여 보상 및 공사 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

10-2. 지방채 발행사업

우리 목포시에서 ‘16년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
	해		당		없		음

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2016년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

10-3. 민간투자사업

우리 목포시에서 ‘16년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’14년까지 부담액	’15년 부담액	’16년 이후 부담 예정액
	해	당		없	음

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2016년까지는 집행액(결산기준), 2017년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

☞ 재정부담액이 큰 사업 위주로 재정부담이 큰 사유를 설명